초정∼화명간 광역도로 개설

□ 사업개요

◯ 위    치 : 김해시 대동면 ~ 부산시 북구 화명동

◯ 사 업 량 : L=3.55km(김해시 2.05km, 부산시 1.5km) B=20~27.8m(4차로)

◯ 사업기간 : 2003. 11. ~ 2026. 12.

◯ 총사업비 : 298,784백만원 (김해시 : 216,069 부산시 : 82,715)

◯ 연차별 투자 현황(계획)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025이후	비 고
합 계	298,784	251,163	4,000	43,621
국 비	121,934	116,158	2,000	3,776
도 비	34,800	30,500	1,000	3,300
시 비	100,692	63,147	1,000	36,545
부산시	41,358	41,358	-	-

□ 추진상황

◯ ‘03. 11. : 사업시행협약 체결(김해시↔부산시)

◯ ‘12. 10. : 1단계구간(안막IC~화명IC) 완료

◯ ‘17.  1. : 2단계구간(초정IC~안막IC) 재설계 착수

◯ ‘22.  6. : 총사업비 조정 승인, (264,633백만원→300,968백만원)

◯ ‘22. 12. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수

◯ ‘23.  1. : 총사업비 자율조정 승인(낙착차액 감액·56억원)

◯ ‘24.  1. : 교량 기초공사 시행 중

□ 추진계획

◯ ‘26. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

◯ 대구~부산간 고속도로, 남해고속도로, 신항배후도로 등과의 연결을 통한 유기적인 도로망 구축으로 인적·물적 수송의 원활을 통한 국가경제발전 도모

□ 위치도

부산신항배후도로

중앙고속도로

초정 IC

안막 IC

2단계

[추진중]

1단계

[기시행]

□전경사진